АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ОБИ	
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

12.01.2023 г.                                                               №  25

О проведении актуализации схемы теплоснабжения 
города Оби Новосибирской области 
на период до 2031 года, 
утвержденной постановлением администрации
города Оби Новосибирской области от 17.06.2022 г. № 617

	В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании ст. ст. 24-26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Провести актуализацию схемы теплоснабжения города Оби Новосибирской области на период до 2031, утвержденной постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 17.06.2022 г. № 617, на 2024 год.
2.	Утвердить график мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения (приложение).
      3.  Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление и уведомление о начале актуализации схемы теплоснабжения в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Глава города Оби
Новосибирской области                                       П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 города Оби Новосибирской области
от 12.01.2023 г. № 25

График мероприятий по актуализации 
схемы теплоснабжения 

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Ответственное лицо	
1	Размещение уведомления о начале актуализации схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации города Оби.	до 15.01.2023 	Заместитель главы администрации, начальник управления 
Т.Л. Кожевникова

Начальник управления, руководитель общественной приемной Главы города
О.А. Сергеева	
2	Осуществить сбор сведений и предложений от ресурсоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с п. 10 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154, для представления информации организации, выполняющей актуализацию схемы теплоснабжения	до 01.03.2023	Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

3	Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для актуализации схемы теплоснабжения, заключение контракта	до 01.03.2023	Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

Заместитель начальника управления, ответственный по закупкам
М.В. Духопел	
4	Актуализация схемы теплоснабжения	30.04.2023	Подрядная организация по договору	
5	Опубликование проекта актуализированной схемы теплоснабжения, сведений о размещении проекта  	05.05.2023	Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

Начальник управления, руководитель общественной приемной Главы города
О.А. Сергеева 	
6	Сбор замечаний и предложений по актуализации схемы теплоснабжения	28.05.2023	Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова	
7	Размещение на официальном сайте уведомления о проведении публичных слушаний 	31.05.2023	Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

Начальник управления, руководитель общественной приемной Главы города
О.А. Сергеева	
8	Проведение публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения	05.06.2023	Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова	
9	Размещение на официальном сайте результатов проведения публичных слушаний	07.06.2023	Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

Начальник управления, руководитель общественной приемной Главы города
О.А. Сергеева	
10	Внесение изменений в схему теплоснабжения с учетом замечаний, предложений и результатов слушаний	20.06.2023	Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

Подрядная организация по договору	
11	Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения	до 27.06.2023 	Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова	
12	Схема теплоснабжения в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения подлежит размещению в полном объеме на официальном сайте	до 01.07.2023	Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

Начальник управления, руководитель общественной приемной Главы города
О.А. Сергеева	

___________